Smlouva o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

Název projektu: 
„Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice“

Smluvní strany:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
kterou zastupuje: Dr. Ing. Václav John, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, 772 58
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: 
ISPROFIN: 

a

se sídlem: 
IČ: , DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  soudem v ,
oddíl , vložka 
bank. spojení: , č. účtu: 
jejímž jménem jedná: 
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1	Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.2	Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.3	Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
1.4	Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
1.5	Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).
2.	ÚČEL SMLOUVY
2.1	Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 4. 2013 pod evidenčním číslem svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice.“ Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
2.2	 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
2.3	Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
2.3.1	v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
2.3.2	v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
2.3.3	Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3.	PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 
3.1	Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související se zhotovovanou stavbou, (dále jen „Dílo“).
3.2	Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost ke zhotovení Díla. 
3.3	Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena díla bez DPH: 	
výše DPH (základní sazba): 	
Cena díla včetně DPH: 	

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v  Příloze č. 4 této Smlouvy.
Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dani z přidané hodnoty“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o dani z přidané hodnoty nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
3.4	Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:
Zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy.
Dokončení stavebních prací: 31.7.2013 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Předávací protokol.
Lhůta pro realizaci stavebních prací činí celkem 2 měsíce. Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla podle odstavce 3.6.5 Obchodních podmínek.
Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu, nejpozději však do 31. 8. 2013.
Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do 1 měsíce a v digitální formě do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu, nejpozději však 31. 8. 2013.
3.5	Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

4.	ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ
4.1	Záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z  Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. Kč.
4.2	Písemný příslib banky dle odst. 2.17 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nevyžaduje
4.3	Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.15 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí: 
výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000,-- Kč/ započatá hodina	
výluka traťové koleje	10.000,-- Kč/ započatá hodina	
výluka dvou a více traťových kolejí (přerušen provoz)	20.000,-- Kč/ započatá hodina	
výluka staničních kolejí - dopravní	5.000,-- Kč/ započatá hodina	
výluka ostatních kolejí	1.000,-- Kč/ započatá hodina	

5.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1	Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
5.2	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5.3	Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
5.4	Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či závazky nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5.5	Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
5.6	Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
5.7	Tato Smlouva je vyhotovena ve  vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží vyhotovení.
5.1	Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách Objednatele. 
5.2	Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Obchodní podmínky	
Příloha č. 2:	Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), 
b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb a 
c) Zvláštní technické podmínky 	
Příloha č. 3:	Související dokumenty	
Příloha č. 4:	Cena Díla dle SO a PS	
Příloha č. 5:	Harmonogram postupu prací	
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby	
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění	
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů	

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne	
V _______ dne __.__.______

...................................................................................
Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky 
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace	...................................................................................

Příloha č. 1
Obchodní podmínky

Příloha č. 2
Technické podmínky: 

a)	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
Technické kvalitativní podmínky netvoří nedílnou součást smlouvy. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP Staveb) plně seznámeny a že v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tyto Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP Staveb) tvoří část obsahu smlouvy. TKP staveb jsou pro Zhotovitele závazná s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP staveb. 
b)	Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
c)	Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3
Související dokumenty

•	schvalovací protokol přípravné dokumentace (SŽDC, s.o., Odbor investiční, č.j61273/2011-OI ze dne22.12.2011
•	rozhodnutí o umístění stavby (Městský úřad Hanušovice, Odbor výstavby, č.j MUHA 5833/2011 ze dne 9.9.2011),
•	projekt stavby zpracovaný MORAVIA CONSTULT Olomouc a.s.,
•	schvalovací protokol projektu stavby č.j. 1988/2013-SSV-U1/Bed ze dne 26.3.2013
•	stavební povolení č.j. DUCR-21382/13/Bk ze dne 23.4.2013

Příloha č. 4
Cena Díla dle SO a PS

•	Rozčlenění Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):
Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v odst. 13.4  Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče v souladu s odstavcem 9.1 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 6
Oprávněné osoby
Za Objednatele:
•	ve věcech smluvních a obchodních:
Jméno a příjmení		
E-mail		
Telefon		
Fax		

•	ve věcech technických:
Jméno a příjmení		
E-mail		
Telefon		
Fax		

•	technický dozor stavebníka (TDS):
Jméno a příjmení		
E-mail		
Telefon		
Fax		

•	ve věcech geodetických:
Jméno a příjmení		
E-mail		
Telefon		
Fax		

•	Koordinátor BOZP na staveništi:
Jméno a příjmení		
Adresa 		
E-mail		
Telefon		
Fax		
Za Zhotovitele:
•	ve věcech smluvních a obchodních: 
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	ve věcech technických:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	stavbyvedoucí:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	zástupce stavbyvedoucího:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	osoba odpovědná za kontrolu kvality:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		

osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	osoba odpovědná za odpadové hospodářství:
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		
•	územně oprávněný zeměměřický inženýr
Jméno a příjmení		
Adresa		
E-mail		
Telefon		
Fax		

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

•	Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
	
Pojištění stavebních Děl minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	Na toto místo bude jako minimální výše pojistného plnění vložena částka, která bude odpovídat výši ceny za dílo bez DPH, kterou uchazeč včlení do těla závazného vzoru smlouvy předloženého v nabídce uchazeče	
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	10.000.000,- Kč	

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE
(obchodní firma, sídlo a IČ)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA	

			

			

CELKEM %